РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

« 25 » апреля 2012 г. №12/73-ГС
 г. Ливны	Принято на __12_заседании
 Ливенского городского Совета
народных депутатов IV созыва	

Об утверждении Программы подготовки
жилищно-коммунального хозяйства г. Ливны 
к осеннее- зимнему периоду 2012-2013гг.

В целях устойчивого и надёжного прохождения отопительного сезона 2012-2013гг., обеспечения жителей города жилищно-коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества, создания экономического механизма, стимулирующего эффективное использование энергетических и материальных ресурсов, а также сокращения нерационального потребления коммунальных услуг, Ливенский городской Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу подготовки жилищно-коммунального хозяйства г. Ливны к осеннее – зимнему периоду 2012- 2013 гг. (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

Председатель Ливенского городского
Совета народных депутатов					 Е.Н. Конищева

Глава города								 Л.И. Фаустов

Приложение
 к решению Ливенского городского 
Совета народных депутатов
 от 25 апреля  2012г. № 12/73-ГС

Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства г. Ливны к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.

Паспорт Программы
Наименование
Программы	– Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства г. Ливны к осенне-зимнему периоду
2012-2013 гг.	
Заказчик Программы	– Администрация города Ливны	
Основные разработчики Программы	– управление жилищно - коммунального хозяйства; финансовое управление администрации г. Ливны, комитет экономики предпринимательства и торговли администрации г.Ливны	
Цели и задачи
Программы	–повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.	
Срок реализации
Программы	– 2012-2013 гг.	
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы 29 025,93 тыс. руб.:
-средства городского бюджета 6 278 тыс.рублей;
-прогнозируемые средства предприятий 22 747,93тыс.руб.;	
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	– обеспечение повышения эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность условий проживания горожан.	
Исполнители Программы	– управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Ливны, финансовое управление администрации г. Ливны, организации коммунального комплекса.	

1. Введение
Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне- зимнему периоду 2012-2013 гг. (далее по тексту «Программа») включает в себя перечень мероприятий, повышающих качество и надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; способствует устойчивому финансированию жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов всех уровней, а также обеспечивает комфортные и безопасные условия проживания гражданам города.
Программа предусматривает внедрение энергоресурсосберегающих технологий, широкое применение мер по стимулированию эффективного хозяйствования муниципальных жилищно-коммунальных предприятий, использования и применения ими всех ресурсов, в том числе собственных и заемных для более полного удовлетворения надежного и бесперебойного обслуживания потребителей жилищно-коммунальных услуг.

2. Мероприятия программы
Программа включает мероприятия по восстановлению основных фондов по реализации передовых инженерно-технических решений, созданию организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих надежную и качественную работу муниципальных жилищно-коммунальных предприятий (приложение №1 и приложение №2 к Программе).
Обеспечение финансовой стабилизации муниципального жилищно-коммунального хозяйства является основным условием формирования прозрачных экономических взаимоотношений.

Обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального хозяйства.
Обеспечение финансовой стабилизации городского жилищно-коммунального хозяйства является основным условием формирования прозрачных экономических взаимоотношений в отрасли и предусматривает решение реструктуризации и ликвидации имеющейся задолженности в организациях жилищно-коммунального хозяйства.
Данные мероприятия носят краткосрочный характер, и экономический эффект от их реализации предполагается получить в течение 2012-2013 гг.

Реструктуризация и ликвидация задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Для оздоровления финансовой дисциплины в городском жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается реструктуризировать задолженность городского бюджета и бюджетных организаций перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, установить реальные и жесткие сроки ее ликвидации.
Существующая задолженность бюджета и бюджетных учреждений перед организациями жилищно-коммунального хозяйства должна быть включена в расходную часть бюджета города на весь срок реструктуризации.
Работа по инвентаризации и реструктуризации бюджетной задолженности в городском жилищно-коммунальном хозяйстве относится к числу первоочередных мероприятий, равно как и решение вопроса о дебиторской задолженности городского населения. В ее состав входят как текущая, так и просроченная задолженность.

Экономическая модель устойчивого функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятия Программы направлены на переход к рациональной экономической модели, надежному и качественному функционированию городского жилищно-коммунального хозяйства.
Модернизация системы экономических отношений в городском жилищно-коммунальном хозяйстве предусматривает принципиальные изменения, как функции её участников, так и механизмов их взаимодействия и организации финансовых потоков.

3. Основные цели и задачи реализации Программы.
Основные цели программы – повышение эффективности, качества и надежности функционирования систем жизнеобеспечения для горожан, привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе, из областного бюджета в городское жилищно-коммунальное хозяйство.
Основной задачей реализации Программы является:
- снижение затрат и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города;
- финансовое оздоровление муниципальных жилищно-коммунальных предприятий в результате структурной реструктуризации и ликвидации их финансовой задолженности;
- доведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения города и иных потребителей до экономически обоснованного уровня, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты коммунальных услуг населением;
- создание конкурентной среды в жилищной сфере. Формирование договорных отношений между собственником жилья (или организацией им уполномо-ченной) и управлением жилищно-коммунального хозяйства и подрядными организациями.
Собственник жилищного фонда должен обеспечить:
- соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и использованию жилья и объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение необходимого уровня финансирования для содержания принадлежащей ему недвижимости;
- заключение договоров социального и коммерческого найма, аренды жилых и нежилых помещений в принадлежащем ему жилищном фонде;
- обеспечение систематического контроля за реализацией договоров о выполнении необходимых работ по обеспечению сохранности жилищного фонда, соблюдением объема и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
4. Сроки реализации Программы
Программа носит краткосрочный характер и устанавливает основные направления развития городского жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие два года.
Предполагается реализовать следующие первоочередные мероприятия:
- переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- реструктуризация и ликвидация задолженности бюджета и других потребителей (в т.ч. населения города) перед муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

5. Развитие экономических отношений в области тепло-,электро -, водоснабжения и водоотведения.
Процессы тепло-,электро-,водоснабжения и водоотведения города, несмотря на их разнородность, характеризуются следующими общими признаками:
- использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры (сетей водопровода, канализации, теплосетей, устройств по передаче электроэнергии и т.д.);
- неразрывность или строгая последовательность процессов производства, передачи и потребления материальных носителей услуги;
- невозможность для потребителя услуг отказаться от получения этих видов услуг на длительный срок;
- невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет более интенсивного их предоставления в другой период;
- необходимость четкой взаимосвязи на всех стадиях производственного процесса;
- тесная зависимость организации производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий.
Организации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие поставку указанных ресурсов по распределительным сетям, являются естественными, локальными монополистами. Их деятельность подлежит регулированию.
Привлечение частных инвестиций в предприятия городской инженерной инфраструктуры – одна из основных целей работы по реформе системы тарифного регулирования. 
Эффективное регулирование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства должно основываться на системе, состоящей их трех частей. Первая часть – определение целей деятельности этих организаций (формирование их производственной и инвестиционной программ), вторая часть – решение вопросов формирования и утверждения тарифов - как средств финансового обеспечения указанных программ и третья часть - проведение мониторинга организаций жилищно-коммунального хозяйства. Эти три компонента в совокупности обеспечивают органам местного самоуправления возможность реализовывать свои обязанности по качественному обеспечению населения коммунальными услугами.
Система тарифного регулирования должна обеспечивать выполнение производственной и инвестиционной программ организаций, утверждаемых на очередной период тарифного регулирования; в том числе:
- стимулировать организаций жилищно-коммунального хозяйства к снижению издержек, повышению качества оказываемых услуг;
- способствовать привлечению инвестиций в организации жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечивать организациям жилищно-коммунального хозяйства формирование необходимого объема финансовых ресурсов.
Помимо создания экономических механизмов, которые стимулировали бы организации жилищно-коммунального хозяйства самостоятельно выявлять резервы снижения издержек на предоставление коммунальных услуг, должен быть предусмотрен механизм выявления заведомо нерациональных затрат, как элемент процедуры тарифного регулирования. В частности, при принятии решения об установлении тарифов должны использоваться результаты комплексных обследований предприятий ЖКХ, включая проведение независимых экспертиз и проверок.

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2012-2013 гг.
Затраты на реализацию Программы складывается из затрат, связанных с обновлением жилищно-коммунального комплекса.
Затраты на обновление жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и ремонту систем жизнеобеспечения.
Приоритетными направлениями указанных работ являются:
-завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах теплоснабжения и водоснабжения;
-замена котлов модернизируемых котельных на котлы с более высоким КПД;
- использование современных изолирующих материалов и технологий при передаче тепловой энергии и воды;
-использование модульных и блочных котельных;
-использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах тепло-и водоснабжения.
Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры требуется проведение следующих работ:
-установка в домах и объектах ЖКХ приборов учета потребления энерго- ресурсов;
-завершение строительства или расширение объектов коммунального назначения;
-перевод жилья на поквартирное отопление.

7. Источники покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального комплекса и предоставление гражданам льготы субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Источниками покрытия затрат на реконструкцию ЖКХ являются средства соответствующих бюджетов, а также иные источники.
Необходимые расходы на реконструкцию ЖКХ определяются на основании прогноза на соответствующий год.
Источниками покрытия затрат, связанных с предоставлением жилищных субсидий, а также установленных законодательством РФ льгот являются средства соответствующих бюджетов.
За счет средств соответствующих бюджетов будут также осуществляться расходы по общему управлению реализацией программы, мониторингу проведения и оценки проектов, содействию проведения тендеров, нормативно-правовому и методическому обеспечению реализации программы.
Величина необходимых расходов ЖКХ в значительной степени будет зависеть от изменения тарифов на электроэнергию и газ. Конкретные объемы средств и направления финансирования инвестиционных проектов будут устанавливаться при утверждении бюджета на соответствующий год.
Важнейшими перспективными источниками финансирования проектов модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса должны стать частные инвестиции. 

8. Управление реализацией Программы.
Организация реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на управление ЖКХ администрации г. Ливны.
Управление ЖКХ администрации г. Ливны организует информационно-разъяснительную работу среди населения города через печатные и электронные средства массовой информации. Оценка реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам года.

9. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания населения города, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;
- повысить эффективность работы муниципальных жилищно-коммунальных предприятий и снизить их затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- ликвидировать уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- повысить хозяйственную самостоятельность муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, их ответственность за качество обслуживания потребителей;
- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов, сокращение нерационального потребления коммунальных услуг.

Приложение №1 к программе 
 подготовки жилищно-коммунального 
 хозяйства г. Ливны к осеннее - зимнему
 периоду 2012 -2013гг.

Программа
подготовки ЖКХ г. Ливны к отопительному сезону 2012-2013 гг.
№
п/п	Наименование мероприятий	Ед.
изм.	Кол-во	Стоимость
тыс.руб.	Сроки исполнения	Источник финансирования 	Ответственный исполнитель 	
					начало	окончание	городской
бюджет	собственные средства предприятий	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ремонтно-строительные работы									
1.	Ремонт кровли	м2	3870	1654,1	Май	сентябрь		1654,1		МУП " Жилсервис" ТСЖ Перспектива", ТСЖ "Престиж", ООО Гидромашжилсервис"	
2.	Ремонт фасадов	м2	2319	579,8	май	Июнь		579,8		МУП " Жилсервис"	
3	Ремонт цоколей	п.м	646,9	323,6	Май	Июнь		323,6		МУП "Жилсервис"	
4.	Бетонирование порогов 	м3	15	67,5	Май 	сентябрь		67,5		МУП "Жилсервис"	
5.	Ремонт подъездов	м2	
15835
	3645,4	январь	декабрь		3645,4		МУП " Жилсервис" ТСЖ Перспектива", ТСЖ "Престиж", ООО "Сервис Плюс", ООО "Гидромашжилсервис"	
6.	Ремонт оконных и дверных блоков	м2	382	266,2	май	сентябрь		266,2		МУП"Жилсервис" ООО "Гидромашжилсервис"	
7.	Ремонт межпанельных швов	п.м.	3000	525	май	август		525		МУП "Жилсервис"	
8.	Электротехнические работы 			194,7	май	ноябрь		194,7		МУП " Жилсервис" ТСЖ Перспектива", ТСЖ "Престиж", ООО "Сервис Плюс"	
9.	Замена внутридомовых сетей системы отопления	п.м	791	328,9	Апрель	Август		328,9		МУП " Жилсервис" ТСЖ Перспектива", ТСЖ "Престиж" ООО "Гидромашжилсервис"	
10.	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры	шт.	3103	1060,2	май	Август		1060,2		МУП " ЖилсервиС" ООО "Сервис Плюс", ТСЖ "Престиж"	
11.	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов	м3	10	75	май	Август		75		МУП "Жилсервис",	
12.	Ремонт теплоизоляции трубопроводов	м3	53	178	май	Август		178		МУП " ЖилсервиС" ООО "Сервис Плюс"	
13.	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения	п.м	1268	882,5	Май	Август		882,5		МУП " Жилсервис" ТСЖ Перспектива"	
14.	Гидравлические испытания трубопроводов отопления	км.	169	611	июль	Август		611		МУП " Жилсервис" ТСЖ Перспектива", ТСЖ "Престиж" ООО Гидромашжилсервис"	
15.	Монтаж ВВП	ед	1	150	Август	Август		150		 ТСЖ "Престиж"	
16	Обучение и подготовка персонала 	Чел	6	30	Июнь	Август		30		 ООО "Сервис Плюс", ТСЖ "Престиж"	
	ИТОГО:			10571,8				10571,8			
	Управление общего образования										
17	Ремонт школ и д/садов	шт.	32	2167	Апрель 	Август	2167			Управление общего образования администрации г.Ливны
	
	МУКП "Ливенское"										
18	Произвести ревизию запорной арматуры и трубопроводов в цехах и подразделениях	шт.	25	20	апрель	июнь		20		МУКП"Ливенское"	
19	Произвести поверку измерительных приборов для котельных предприятия	шт.	30	15	В течение года		15		МУКП"Ливенское"	
	ИТОГО:			35				35			
	МУП "Водоканал"										
20	Сети водопровода	км.	175	368,3	апрель	Август		368,3		МУП «Водоканал»	
21.	Замена ветхих сетей водопровода	км	0,26	328,3	апрель	Август		328,3		МУП «Водоканал»	
22	Подготовка сетей канализации	км	60	235	апрель	Август		235		МУП «Водоканал»	
23	Замена ветхих сетей канализации	м	100	230,93	апрель	Август		230,93		МУП «Водоканал»	
24.	Ремонт КНС	шт.	6	195	апрель	Август		195		МУП «Водоканал»	
25.	Подготовка ОСК и Гл. КНС	шт.	1	745	апрель	Август		745		МУП «Водоканал»	
26.	Подготовка водозаборов и НС	шт.	4	125	апрель	Август		125		МУП «Водоканал»	
27	Административно-производственная база	шт.	14	360,5	март	октябрь		360,5		МУП «Водоканал»	
28	Подготовка отопительной системы	шт.	3	152	март	Август		152		МУП «Водоканал»	
	ИТОГО:			2740,03				2740,03			
29	Наружные электрические сети			6721,6	Январь 	декабрь		6721,6		Ливенский МФ ОАО " Орелоблэнерго"	
30	ОП ООО «Орёлтеплогаз» г. Ливны			6790,5	Январь	декабрь	4111	2679,5		ОП ООО «Орелтеплогаз» г. Ливны	
	Всего по предприятиям			29 025,93			6 278	22 747,93			

Приложение №2 к программе 
 подготовки жилищно-коммунального 
 хозяйства г. Ливны к осеннее - зимнему
 периоду 2012 -2013гг.
 
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к отопительному сезону г.Ливны 2012-2013 г.г.
МУП «Жилсервис»

№
пп	
Наименование мероприятий	
Ед.
изм	
Кол-во	
Стои
мость

тыс.руб.	Сроки исполнения	Источники финансирования	
Ответственный исполнитель	
Примечание	
					Начало 	Окончание	Городск.
бюдж	Собствен-ные средства	Население			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Подготовка жилищного фонда											
	Жилой фонд- всего	ед/тыс. м2	281/ 432,2									
I	Ремонтно-строительные работы											
1	Ремонт мягкой кровли
Селищева 1, 2, 
Победы 1
Денисова 2, 3, 7, 11, 13, 17
Мира 138, 140, 142, 144, 146 ,150, 178, 180
Октябрьская 1, 3, 7, 9, 15, 19, 29, 31, 33, 41
Гайдара 2, 4, 8, 10, 12
Заливенская 63, 65, 114, 116, 118
Фрунзе 180г, 182а
Свердлова 43, 49, 66 
Дружбы Народов 165
М. Горького 24
Орджоникидзе 5 	кв.м	3270	1373,4	Май	Август		1373,4		Репин В.С.		
2	Ремонт шиферной кровли 
Денисова 26, 28, 30
Дружбы Народов 161
К. Маркса 122, 131, 147, 151
М. Горького 49, 50
Пушкина 2, 14, 16
 Орджоникидзе 39, 41, 43
Свердлова 48, 52, 64 	кв. м	240	79,2	Май	Сентябрь		79,2		Репин В.С.		
3	Ремонт фасадов
Ленина 34
Фрунзе 159, 161 
К. Филиппова 47
	кв.м	2319	579,8	Май	июнь		579,8		Афонин Н. А.		
4	Ремонт цоколей
Поликарпова 41, 43
Дзержинского 101
Октябрьская 33
К. Филиппова 66
Свердлова 66
	п.м.	646,9	323,6	Май	июнь		323,6		Афонин Н.А.		
5	Ремонт подъездов
К. Филиппова 47 Ленина 8
Дзержинского 91, 110а Селищева 2
Пушкина 2, 4 Заливенская 114
Орджоникидзе 5 Октябрьская 15а, 19
Крестьянская 120 Кирова 24
Денисова 13, 28, 30 Мира 140
Гайдара 2 а, 7 Орловская 110-п	кв.м.	11835	2287	Январь	Декабрь		2287		Афонин Н. А.		
6	Ремонт теплоизоляции трубопроводов	куб.м	25	175	Май	Август		175		Репин В. С.		
7	Ремонт межпанельных швов	п.м	3000	525	Май	Август 		525		Репин В. С.		
8	Ремонт остекления 	кв.м	250	91,2	Май	Сентябрь		91,2		Сухоруких О. Н.		
9	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов	куб.м.	10	75	Май	Сентябрь		75		Сухоруких О. Н.		
10	Бетонирование порогов 	куб.м.	15	67,5	Май	Сентябрь		67,5		Сухоруких О. Н.		
11	Ремонт оконных и дверных блоков 	кв.м.	100	150	Май	Сентябрь		150		Сухоруких О. Н.		
12	Электротехнические работы			180	Май	Ноябрь		180		Кулаковский В. А.		
13	Замена внутридомовых сетей отопления	км.	411	192,7	Май	Июль		192,7		Мастера участков		
14	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения 	км.	1263	880,5	Май	Август		880,5		-׀׀-		
15	Замена кранов и вентилей	шт.	817	417,7	Май	Август		417,7		-׀׀-		
16	Замена затворов 
	шт.	26	52	Май	Август		52		-׀׀-		
17	Ревизия кранов и вентилей	шт.	2000	507	Май	Август		507		-׀׀-		
18	Гидравлические испытания трубопроводов отопления	км	150	550	Июль	Август		550		-׀׀-		
	ИТОГО:			8506,6				8506,6				
ТСЖ "Перспектива"	
1	Частичный ремонт мягкой кровли, обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов, кровли.	м2	3,6	1,5	Сентябрь	Октябрь		1,5		Заикин И, В.		
2	Провести остекления окон подвальных помещений			1,0	Сентябрь	Сентябрь		1,0		Заикин И. В.		
3	Произвести ремонт выходов с тех. Этажей на крыши домов			1,0	Сентябрь	Сентябрь		1,0		Заикин И. В.		
4	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода			2,0	Август	Август		2,0		Заикин И. В.		
5	Частичная замена трубопровода отопления	П.м.	3
	1,2
	Август	Август		1,2		Заикин И. В.		
6	Приобретение, поверка и допуск в эксплуатацию приборов учёта, манометров, термометров			2,7	Август 	Август		2,7		Заикин И. В.		
7	Оформление паспорта готовности 				Август	Август 				Савков В.П.		
	Итого			9,4				9,4				
	ООО "Сервис Плюс" 							
1	Ремонт входных дверей в подъездах	Шт.	14	1,5	Август	Сентябрь		1,5		Анисимов А.В		
2	Остекление окон подъездов и подвальных помещений	Шт.	10	2,4	Август	Сентябрь		2,4		Анисимов А.В		
3.	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры	Шт.	30	3,5	Май	Июль		3,5		Анисимов А.В		
4.	Гидравлическая промывка отопительной системы	Ед.	3	10	Июль	Август		10		Анисимов А.В		
5.	Поверка укомплектование измерительных приборов	Шт.	10	6	Август	Август		6		Анисимов А.В		
6	Восстановление изоляции теплотрассы	М	28	3	Июнь	июль		3		Анисимов А.В		
7	Обучение и подготовка персонала	Чел.	3	15	Июнь	Август 		15		Анисимов А.В		
8.	Оформление паспорта готовности 				Август	Август 		-		Анисимов А.В		
	Итого 			41,4								
 ТСЖ "Престиж"	
1	Ремонт кровли	м2	250	50	Май 	Июнь		50		Савенков В.Д.		
2	Ремонт подъездов 	шт.	7	280	Май 	Октябрь		280		Савенков В.Д.		
3	Установка металлических дверей на подъезды 	шт.	8	120	Май 	Декабрь 		120		Савенков В.Д.		
4	Остекление окон подъездов и подвального помещения	шт.	10	2,4	Август 	Сентябрь		2,4		Савенков В.Д.		
5	Гидравлическая промывка отопительной системы	ед.	3	5	Июль	Август		5		Савенков В.Д.		
6	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры	шт.	30	10	Май	Июль		10		Савенков В.Д.		
7	Замена труб системы отопления	п.м	200	40	Апрель	Июнь		40		Савенков В.Д.		
8	Монтаж ВВП	шт	1	150	Август	Август		150		Савенков В.Д.		
9	Поверка и укомплектование измерительных приборов	шт	10	6	Август	Август		6		Савенков В.Д.		
10	Обучение и подготовка персонала	Чел.	3	15	Июнь	Август		15		Савенков В.Д.		
11	Оформление паспорта готовности 				Август	Август 		-		Полетаев С.Д.		
	Итого 			678,4				678,4				
ООО "Гидромашжилсервис"	
1	Частичный ремонт кровли:
 ул. Мира д. 197, д 217 А, 
ул. Селищева, д.24А, 	м2	535	133,7	Май 	Сентябрь 		133,7		Быков В. Н.		
2	Ремонт подъездов ул. Денисовад.34, ул. Селищева, д.5, ул. Победы д.11	шт	11	952	Январь 	Сентябрь 		952		Быков В. Н.		
3	Ремонт и опрессовка систем отопления жилых домов 	Ед.	50	150	Май 	Декабрь 		150		Быков В. Н.		
	Итого			1235,7				1235,7				
ООО "Гидромашжилсервис Плюс"	
1	Ремонт подъездов ул. Др. Народов, д.119, ул. К. Маркса,д.114	шт.	4	334	Январь	Июнь		334		 Быков В. В.		
2	Ремонт цоколей: ул. К.Маркса д114, ул. Др. Народов д.163	м.2	400	181	Апрель	Сентябрь 		181		Быков В. В.		
3	Ремонт и опрессовка систем отопления ж/домов	ед	11	120	Апрель	Август 		120		Быков В. В.		
	Итого			635				635				
Управление общего образования	
1.	Ремонт отопления с заменой трубопроводов, чугунных радиаторов и регистров 
Шк. № 1, 2, гимн., Д/с № 10, 16, 12, 18, 22, СЮТ, ППМСЦ, .
Замена наружной теплотрассы Гимн.			1244	Апрель	Август	1244			Директор МУ «РХС»
Лукьянчиков А.В	текущий	
2	Ремонт мягких кровель
Шк. 2, 11, д/с № 19, 20 ,22	 м2	1600	200	Май	Август	200			Директор МУ «РХС»
Лукьянчиков А.В	Текущий	
3	Остекление школ и д/садов	м2	300	60	май	август	60			Директор МУ «РХС»
Лукьянчиков А.В	Текущий	
4	Замена оконных блоков шк. № 11	шт.	11	198	Июнь	Август	198			Директор МУ «РХС»
Лукьянчиков А.В	Капитальный	
5	Ремонт фасадов д/с №1 с заменой оконных блоков (35шт)	м2	150	415	Июнь	Август	415			Директор МУ «РХС»
Лукьянчиков А.В	текущий	
6	Обучение ответственных за теплообрудование и пожминимум	чел.	30	50	Май	Май	50			Руководитель учреждений		
	ВСЕГО			2167			2167					
МУКП «Ливенское»	
21
1	Произвести ревизию запорной арматуры и трубопроводов в цехах и подразделениях	шт.	25	20	Апрель.	июнь		20		Ефанов О.Н
Мензоров С.А. Гришунова Л. В.
		
22
2	Произвести поверку измерительных приборов для котельных предприятия	шт.	30	15	в течение года 		15		Хаустова Л. Г.
Ефанов О.Н
Мензоров С.А. Гришунова Л. В.
		
	ИТОГО:			35				35				
МУП "Водоканал"	
1	Сети водопровода
1.хлорирование с промывкой разводящих сетей- 175км;
2.замена люков-30шт.;
3.ремонт колодцев- 65шт.;
4.ремонт задвижек - 25шт;
5.ремонт в/колонок- 50шт;
6.замена в/колонок-4;
7. замена пожарных гидрантов- 4шт.;
8.чистка колодцев- 62шт.;
9.бетонирование площадок у в/колонок2шт. 	км	175	368,3	2 –квар.	3 – квар.		368,3		Сопов А.Л
начальник ВКУ

.		
2	Замена ветхих сетей водопровода:
по ул.Энергетиков 9, (в районе СУ -816)	км	0,26	328,3	1-квар.	3-квар.		328,3		Сопов А.Л
начальник ВКУ		
3	Подготовка сетей канализации
1.очистка от минерального осадка см.колодцев 50шт.
2.ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах- 7шт.
3.гидропневматичемкая промывка очистка от мин.осадка 60км к/сети
4.замена люков- 25шт.
	км	60,0	235	2-квар.	3-квар.		235		Сопов А.Л
начальник ВКУ
		
4	Замена ветхих сетей канализации:
1.ремонт сетей
ул. Пушкина д.1 –30 м
ул. Гайдара д.1. – 70 м	м	100	230,93	2-квар.	3-квар		230,93		Сопов А.Л
начальник ВКУ
		
5	Ремонт КНС
1.Замена насоса СМ100/65 на "КСМ"
2.чистка приемных отделений на КНС
3.частичный косметический ремонт на КНС
	шт	6	195	2-квар.	3-квар		195		Холоимов
В.И.-нач.ВиКНС		
6	Подготовка ОСК и Гл.КНС
1.очистка иловой карты
2 замена насоса СД450/22,5 на Гл.КНС
3.чистка приемного отделения Гл.КНС	шт.	1	745	2-квар.	3-квар		745		АнохинА.Н
начальник ОСК

7	Подготовка отопительной системы
1.производственная база
2.ОСК, Гл.КНС
3.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1,3,4, НС- «Ключевка-2»
RYC- «Сахалинец», КСМ, «Автоагрегатный», Гл.КНС, КНС «Гидромаш»; "Диск"	шт.	3	152	2-квар.	3-квар		152		Холоимов
В.И.-нач.ВиКНС

АнохинА.Н
начальник ОСК

Дорохин В.М. инженер механик		
8	Подготовка водозаборов и НС
1.текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР
2.ремонт энергооборудования на ВНС-1,3,4 и НС «Ключевка-2»
3.ремонт запорной арматуры Ду100-400мм согласно графика ППР
4.Косметический ремонт НС.	шт	4	125	2-квар.	3-квар		125		Холоимов В.И.-нач.ВиКНС

9	Административно -производственная база
Ремонт спецавтотранспорта согласно графика ППР
	шт	14	360,5	1-квар.	4-квар.		360,5		Дорохин В.М. инженер механик
		
	ИТОГО:			2740,03				2740,03				
Ливенский МФ ОАО " ОРЁЛОБЛЭНЕРГО" (по согласованию)	
1	Реконструкция и капитальный ремонт ЛЭП – 0.4 кВ по ул:
Колхозная, Гагарина, Гражданская, пер Гражданский, пер. Народный, 6-й Гвардейской армии, Тургенева, 1-я Черкасская, пер Железнодорожный, Селитренникова, Комосомольская, 2-я Бутуровка, Др.Народов, Орловская, Дзержинского 
	км	8,5	4889,2	январь	декабрь		
4889,2		ст.мастер ЛЭП Савков Н. И.		
2	Ремонт и испытание КЛ-6кВ повышенным напряжением
Ремонт и испытание КЛ-0,4кВ	км	1

1	170,8

96,4	январь	декабрь		170,8

96,4		мастер ЛЭП Ражиков В.А.		
3	Планово-предупредительный ремонт трансформаторных подстанций согласно графика (ежемесячно)	шт.	15	382,9	январь	декабрь		382,9		мастер ЛЭП
Пантелеев С.А.		
4	Ревизия трансформаторных подстанций (два раза в год)	шт.	118	145,9	март	сентябрь		145,9		мастер ЛЭП
Пантелеев С.А.		
5	Текущий ремонт ЛЭП-6кВ

Текущий ремонт ЛЭП-0,4кВ	км	 2

5	 199,7

356,8	январь	декабрь		199,7

356,8		ст.мастер ЛЭП Савков Н. И.		
6	Обрезка деревьев	км	20	138,9	январь	декабрь		138,9		ст.мастер ЛЭП Савков Н. И.		
7	Содержание автотракторной техники в исправном состоянии, стоянка в тепловых боксах в зимний период	шт	19	253,3	январь	декабрь		253,3		мастер СМиТ Фетисов Н.А.	
	
8	Осмотр и ревизия грозозащиты	комп	52	21,6	январь	декабрь		21,6		мастер ЛЭП Пантелеев С.А.		
9	Создание и хранение аварийно-страхового запаса материалов
			66,1	январь	декабрь		66,1
		гл.инженер
Емельянов В.Н.		
	Итого:			6721,6				6721,6			

ОП ООО "Орёлтеплогаз" г. Ливны 
	
1	Блочно – модульная котельная БМК – 40 МВТ								
1.1	Ревизия и ремонт оборудования котельной со сдачей в поверку измерительных приборов			400	Август	Август		400		Лифановский И.А.
Потапов А.В.
Горностаев А.А.		
1.2	Ремонт гидротеплоизоляции т /с по ул. Поликарпова д/у 150
от ул. К. Маркса к Д/с №1 Д/у 100
ул. Ленина д.10, 12 Д/у 100,50
во дворе Д/с № 12 Д/у 89
ул. Дружбы народов Д/у 100	м	
2х200
2х200
160,160
2х150
2х210	
40
30
20
20
30	Август	Август		140		Захаров С.В.
		
1.3	Ремонт гидротеплоизоляции т/п ГВС от кот по ул. К. Маркса к Д/с № 1 Ду 80, 70	м	200
200	30	Август	Август		30		Захаров С.В.		
1.4	Замена т/п ГВС по 
ул. Поликарпова Ду 80
ул. Московская Ду 100-80	м	2х200
360,360	110
300	Август	Август		410		Захаров С.В.		
1.5	Замена т/с по
ул. К. Маркса 112 -114 Д/у 200 
ул. К. Маркса 141 Ду 57
ул. Ленина 22а Ду 70	м	
2х80
2х30
2х34	
180
6
6	Июнь	Июнь		192		Захаров С. В.		
1.6	Капитальный ремонт т/с Ду150 с заменой труб в ППУ изоляции по ул. К. Маркса	м	300	350	июнь	Август	350			Подрядная организация		
1.7	Капитальный ремонт здания мастерской по ул. К. Маркса с заменой кровли, ремонт душевой и сан. Узла			150	июнь	Август 	150			Подрядная организация		
2	Котельная по ул. Советская								
2.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов - 7 шт., насосов, - 11 шт., водоподогревателей -7 шт., 			43	Июль	Июль		43		Захаров С. В.	По графику ППР	
2.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			3	Июнь	Июль		3		Горностаев А.А.		
2.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			0,5	Май	Май		0,5		Потапов А.В.		
2.4	Устройство отмостки вокруг здания котельной			3	Май	Май		3		Захаров С.В.		
2.5	Капитальный ремонт здания котельной с заменой кровли			150	май	август	150			Подрядная организация		
3	Котельная по ул. Берёзовая								
3.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов -6 шт., насосов, - 9 шт., водоподогревателей -7 шт., 			43	Май	Май 		43		Добродеев Н.И.	По графику ППР	
3.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			3	Июль	Август 		3		Горностаев А.А.		
3.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			0,5	Июнь	Июнь		0,5		Потапов А.В.		
3.4	Теплоизоляция бойлеров скорлупой			2	Июнь	Июнь		2		Добродеев Н.И.		
3.5	Ремонт теплоизоляции т/сДу150	м	250х2	45	Июнь	Июнь		45		Добродеев Н.И.		
3.6	Капитальный ремонт здания котельной с заменой кровли			200	июнь	Август 	200			Подрядная организация		
4	Котельная по ул. Заливенская								
4.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов -2 шт., насосов, - 4 шт.			11	Июнь	Июнь		11		Захаров С.В.	По графику ППР	
4.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1	Май 	Июнь		1		Горностаев А.А.		
4.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			0,5	Июнь	Июнь		0,5		Потапов А.В.		
5	Котельная по ул. Садовая 								
5.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов -3 шт., насосов, - 2шт.. водоподогревателей - 2 шт.			7	Июнь	Июнь		7		Захаров С.В.	По графику ППР	
5.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1	Июнь	Июнь		1		Горностаев А.А.		
.5.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 				Июнь	Август 				Потапов А.В.		
6	Котельная по ул. Пухова								
6.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов -4 шт., насосов, - 3 шт.			4	Июнь	Июнь		4		Захаров С.В.	По графику ППР	
6.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1,5	Май 	Июнь		1,5		Горностаев А.А.		
6.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			2	Август	Август		2		Потапов А.В.		
7	Котельная по ул. Аникушкина								
7.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов -3 шт., насосов, - 6 шт., водоподогревателей – 2 шт.			7	Июль	Июль		7		Захаров С.В.	По графику ППР	
7.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1	Май 	Июль		1		Горностаев А.А.		
7.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			0,5	Июль	Июль		0,5		Потапов А.В.		
												
8	Котельная по ул. 2- я Стрелецкая								
8.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов -5 шт., насосов, - 8 шт., водоподогревателей –4 шт.			7	Июль	Июль		7		Захаров С.В.	По графику ППР	
8.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1	Июнь	Июль		1		Горностаев А.А.		
8.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			0,5	Август 	Август 		0,5		Потапов А.В.		
9	Котельная по ул. Фрунзе								
9.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов - 3 шт., насосов, - 3 шт.			3	Май	Май		3		Добродеев Н.И	По графику ППР	
9.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1,5	Май 	Июнь		1,5		Горностаев А.А.		
9.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			0,5	Июнь	Июнь		0,5		Потапов А.В.		
9.4	Покраска оборудования			2	Май 	Май 		2		Потапов А.В.		
10	Котельная по пер. Железнодорожный 10 а								
10.1	Ревизия и ремонт оборудования: котлов - 3 шт., насосов, - 3 шт.			2	Август 	Август 		2		Добродеев Н.И	По графику ППР	
10.2	Ревизия и ремонт приборов КИПиА и электрооборудования 			1	Август	Август 		1		Горностаев А.А.		
10.3	Ревизия и ремонт газового оборудования 			1	Август 	Август 		1		Потапов А.В.		
10.4	Покраска оборудования			1	Июнь	Июнь		1		Потапов А.В.		
10.5	Капитальный ремонт мягкой кровли гаражей			100			100			Подрядная организация 		
10.6	Капитальный ремонт помещений электроучастка и газовой службы			200			200			Подрядная организация 		
11	ЦТП № 1 по ул. Октябрьская 7а								
11.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
10	
2
2	Январь	Декабрь		4		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании			0,5	Май	Август 		0,5		Горностаев А.А.		
11.2	Теплоизоляция бойлеров скорлупой			2	Июнь	Июнь		2		Добродеев Н.И		
11.3	Покраска оборудования			1,5	Август	Август		1,5		Добродеев Н.И.		
12	ЦТП № 2 по ул. Октябрьская 19								
12.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
12	
5
2	Август	Август		7		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании			1	Август	Август		1		Горностаев А.А.		
12.2	Замена запорной арматуры на ГВС Ду100,80,50	м	4,4,2	20	Август	Август		20		Добродеев Н.И		
12..3	Покраска оборудования			1,5	Август	Август		1,5		Добродеев Н.И.		
13	ЦТП № 3 по ул. Гайдара 4а								
13.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
20	
4
2	Август	Август		6		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании			1	Август	Август		1		Горностаев А.А.		
13.2	Замена запорной арматуры на ГВС Ду100,80	м	2,2	8	Август	Август		8		Добродеев Н.И		
13.3	Теплоизоляция бойлеров скорлупой			2	Июнь	Июнь		2		Добродеев Н.И		
13.4	Покраска оборудования			1,5	Август	Август		1,5		Добродеев Н.И.		
13.5	Частичный ремонт мягкой кровли крыши	м2	100	7	Август	Август		7		Добродеев Н.И.		
14	ЦТП № 4 по ул. Октябрьская 29								
14.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
18	
5
2	Август	Август		7		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании			1	Август	Август		1		Горностаев А.А.		
14.2	Замена запорной арматуры Ду 300	шт.	2	18	Август	Август		18		Добродеев Н.И.		
14.3	Замена запорной арматуры на ГВС Ду100	шт.	4	7	Август	Август		7		Добродеев Н.И.		
14.4	Теплоизоляция бойлеров скорлупой			2	Июнь	Июнь		2		Добродеев Н.И		
14.5	Покраска оборудования			1,5	Август	Август		1,5		Добродеев Н.И.		
15	ЦТП № 5 по ул. Денисова 11								
15.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
12	
2
2	Август	Август		4		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании				Август	Август				Горностаев А.А.		
15.2	Замена запорной арматуры на ГВС Ду100	шт.	2	0,5	Август	Август		0,5		Добродеев Н.И		
15.3	Ремонт запорной арматуры по микрорайону № 7	шт.	80	5				5				
15.4 	Замена т/с Ду150 от Денисова 30 до Денисова 28	м	90	100	Май 	Июнь		100		Добродеев Н.И.		
15.5	Ремонт теплоизоляции т/с Ду 150 от Победы 1 до Селищева 24 скорлупой в стеклопластике	м	200	20	Май	Июнь		20		Добродеев Н.И		
16	ЦТП № 6 по ул. Мира 144								
16.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
8	
1
1,5	Январь	Декабрь		2,5		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании			0,5	Август	Август		0,5		Горностаев А.А.		
16.2	Замена запорной арматуры на ГВС Ду 50	шт.	2	2	Август	Август		2		Добродеев Н.И		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	ЦТП № 7 по ул. Победы 9								
17.1	Ревизия и ремонт оборудования:
Насосного
Водоподогревателей	шт.	
2
4	
0,5
1	Август	Август		1,5		Добродеев Н.И.
	По графику ППР	
	Электрооборудовании			0,5	Август	Август		0,5		Горностаев А.А.		
17.2	Капитальный ремонт здания ЦТП с заменой кровли			70			70			Подрядная организация		
17.3	Замена запорной арматуры на ГВС Ду 50	шт	2	1,5	Август	Август		1,5		Добродеев Н.И.		
18	Магистральная теплосеть 								
18.1	Капитальный ремонт теплосети Ду500 с заменой труб и изоляции на территории ОАО "Промприбор"	м	400х2	1000	Июнь	Август	1000			Подрядная организация		
18.2	Капитальный ремонт надземной теплосети Ду 300 с заменой труб и изоляции на скорлупу в стеклопла-стике по территории парка напротив ОАО "Ливныпластик"	м	400х2	711	Июнь	Август	711			Подрядная организация		
18.3	Ремонт теплогидроизоляции т/с с обертыванием листовой оцинкован-ной сталью 	м	350х2	250	Июнь	Август		250		Добродеев Н.И.		
18.4	Ремонт запорной арматуры Ду 500	шт.	12	5	Июнь	Август		5		Добродеев Н.И.		
18.5	Гидроиспытания т/с			5	Июнь	Август		5		Добродеев Н.И.		
19	Предприятие 								
19.1	Создание аварийного запаса материалов			100	Июнь	Август		100				
19.2	Приобретение Газоанализатора Теsto для проведение режимной наладки котлов			110	Июнь	Август		110				
19.3	Ремонт т/с по результатам гидрав-лических испытаний			600	Июнь	Август		600				
19.4	Приобретение автотранспорта диспетчерской службы			380	Июнь	Август	380					
20	Административное здание (пер. Железнодорожный)								
20.1	Капитальный ремонт здания с заменой оконных и дверных блоков 			700	Июнь	Август	700			Подрядная организация		
20.2	Приобретение и монтаж пожарной сигнализации			100	Июнь	Август	100			Подрядная организация 		
	ИТОГО			6790,5			4111	2679,5