ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от "____" ____________2010г.    № _____
г. Ливны

Об утверждении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
города Ливны  на 2011 -  2013 г.г.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ливны Ливенский городской Совет народных Депутатов  р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Ливны на период с 2011 до 2013 г.г. (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ливенский вестник».

Глава города                                                                    В.П. Ашихмин

Приложение 
к решению Ливенского городского 
Совета народных депутатов
От «__»___________  2010 года № __

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ливны на 2011–2013 годы

ПАСПОРТ
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ливны на 2011–2013 годы

Наименование
Программы	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ливны на 2011–2013 годы	
Основание для разработки 
Программы	Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
	
Заказчик 
Программы	Администрация города Ливны	
Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны 	
Основные цели и задачи Программы	1. Обеспечение развития строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в городе Ливны; 
2. Строительство и модернизация системы коммунальной
инфраструктуры города Ливны; 
3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Ливны;
4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая
безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.	
Сроки реализа-ции Программы 	2011–2013 годы 	
Основные направления Программы
	•	Развитие электрических сетей;
•	Развитие системы теплоснабжения;
•	Развитие системы водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод.	
Исполнители основных мероприятий Программы	МУП « Водоканал»;
ООО « Орелтеплогаз»;
Ливенский филиал ОАО « Орелоблэнерго»	
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляют управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, а именно: 
•	общий контроль;
•	контроль сроков реализации программных мероприятий.	
Ожидаемые результаты	Реализация Программы должна обеспечить:
•	увеличение объёмов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры, в том числе развитие первичного рынка жилья, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство;
•	модернизацию и обновление коммунальной инфра-структуры города Ливны: 
•	снижение эксплуатационных затрат; 
•	устранение причин возникновения аварийных ситуа-ций, угрожающих жизнедеятельности человека;
•	улучшение экологического состояния городской окружающей среды;
•	обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;
•	развитие электрических сетей: 
•	обеспечение бесперебойного снабжения электри-ческой энергией городской инфраструктуры, в том числе объектов нового строительства;
•	развитие теплоснабжения:
•	повышение надежности и качества теплоснабжения;
•	обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;
•	улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;
•	развитие водоснабжения и водоотведения: 
•	повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
•	соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;
•	снижение уровня потерь воды.	

Общая часть.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-структуры города Ливны на 2011–2013 годы разработана в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса». Программа разработана в рамках реализации на территории города Ливны приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и направлена на осуществление мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой строительства и ввода в эксплуатацию в 2011–2013 годах жилья и объектов социальной инфраструктуры.
Целью Программы развития систем коммунальной инфраструктуры города Ливны на 2011–2013 годы является строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, привлечение средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.
Программой предусматривается строительство, модернизация и реконструкция объектов в сфере электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. Разработка программы выполнялась на основе данных муниципальных организаций и предприятий немуниципальной сферы коммунального хозяйства города в соответствии с документом территориального планирования – Генеральным планом города Ливны.
Предусматривается внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ливны в связи с изменениями в Генеральном плане города.
Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счёт средств городского бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-туры города Ливны на 2011–2013 годы включает: 
– паспорт Программы; 
– общую часть;
– программу строительства, реконструкции и модернизации объектов электро–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод, по городу Ливны на 2011–2013 годы, включающую следующие разделы:
Раздел 1. Электроснабжение.
Раздел 2. Теплоснабжение.
Раздел 3. Водоснабжение.
Раздел 4. Водоотведение и очистка сточных вод.
В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации города, разрабатываются инвестиционные программы и выполняются расчёты и обоснования необходимых финансовых ресурсов. Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий в соответствии с механизмом, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования цен и тарифов пред-приятий коммунального комплекса», на основе этих программ подготав-ливаются предложения о размере платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Необходимость разработки и реализации Программы на территории города обусловлена перспективой развития городского округа, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учётом планируемого ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры в 2011–2013 годах.
Наличие утверждённой Программы является необходимым условием для участия в отборе субъектов Российской Федерации, который проводится Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».
Реализация Программы должна обеспечить:
- увеличение объёмов строительства объектов социальной инфраструктуры и жилья; 
- модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры города Ливны, в том числе:
- развитие сетей и объектов электро–, тепло–, водоснабжения и водоотведе-ния для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строи-тельстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- улучшение экологического состояния городской окружающей среды;
- обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

ПРОГРАММА
строительства и модернизации объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по городу Ливны на 2011 - 2013 годы

№	Наименование объектов	Краткое обоснование необходимости	Един.изм.	Мощность, объем/ ориент.стоимость	Всего 2011-2013г	в том числе:	Примечание	
						2011	2012	2013		
						из городского бюджета	внебюджетные инвестиции	из городского бюджета	внебюджетные инвестиции	из городского бюджета	внебюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Раздел 1. Водоснабжение и водоотведение и очистка сточных вод МУП " Водоканал"												
1
	Строительство водопровода по ул. Энергетиков	Обеспечение независимого надежного и бесперебойного водоснабжения МКД	м	1050	1050		1050						
			тыс.руб	1021,7	1021,7	101	920,7						
2
	Проектирование и строительство водовода от ВНС № 2 до ул. Сербаловская	Обспечение стабильного водоснабжения п.Заливенский	м	900									
			тыс.руб	849,4	849,4	89,187	760,213						
3
	Проектирование и строительство водовода от ВНС № 4 " Воротынск" до НС " Ключевка 2"	Обеспечение стабильного бесперебойного водоснабжения	м	13000	13000								
			тыс.руб.	13242,1	13242,1	224,229	1963,371	631,25	4896	631,25	4896		
4	Замена илососной машины для вакуумной очистки колодцев	Замена на машины, отвечающие современным требованиям	тыс.руб	2052,1	2052,1	225,731	1826,369						
5	Проектирование сетей канализации и КНС в микрорайоне Солнечный	Обеспечение подключения к городской системе канализации новых потребителей	тыс.руб.	1812,7	1812,7	200	1612,7						
6	Проектирование сетей канализации и КНС в микрорайоне Заливенский	Обеспечение подключения к городской системе канализации новых потребителей	тыс.руб	2344,1	2344,1	253,2	2090,9						
7
	Строительство новых сетей канализации в микрорайоне Заливенский	Обеспечение подключения к городской системе канализации новых потребителей	м	6900									
			тыс.руб	4120,9	4120,9			345	2939,8	87,8	748,3		
8	Строительство КНС производительностью 5 тыс.кум.м/сутки в микрорайоне Заливенский	Обеспечение подключения к городской системе канализации новых потребителей	тыс.руб.	3200	3200			320	2880				
9
	Строительство новых сетей канализации в микрорайоне Солнечный	Обеспечение подключения к городской системе канализации новых потребителей	м	2469									
			тыс.руб.	2509,9	2509,9					276,1	2233,8		
10	Строительство КНС производительностью 5 тыс.кум.м/сутки в микрорайоне Солнечный	Обеспечение подключения к городской системе канализации новых потребителей	тыс.руб.	3200	3200					320	2880		
11	Замена гидродинамической машины высокого давления для очистки труб и прочистки трубопроводов	Замена на машины, отвечающие современным требованиям	тыс.руб.	2499,6	2499,6		2499,6						
	Итого				36852,5	1093,347	11673,853	1296,25	10715,8	1315,15	10758,1		
	Раздел 2. Теплоснабжение												
	ООО" Орелтеплогаз"												
12	Модернизация котельной по ул. Садовая, с полной заменой основного и вспомогательного оборудования котельной	Повышение надежности; повышение эффективности использования ТЭР; снижение тепловых потерь; автоматический режим работы	тыс.руб.	3000	3000	300	2700						
13	Модернизация котельной по ул. Заливенская, с полной заменой основного и вспомогательного оборудования котельной	Увеличение удельной производительности; повышение надежности; повышение эффективности использования ТЭР;автоматический режим работы	тыс.руб.	4200	4200	441	3759						
14	Модернизация котельной по ул. Аникушкина, с полной заменой основного и вспомогательного оборудования котельной	Увеличение удельной производительности; повышение надежности; повышение эффективности использования ТЭР;автоматический режим работы	тыс.руб.	1500	1500	165	1335						
15	Модернизация ЦТП №№ 1,2,3,4,5,6,7 с заменой скоростных водоводяных водонагревателей на пластинчатые; заменой насосов; установкой частотных преобразователей на электродвигатели.	Повышение эффективности использования ТЭР; автоматический режим работы	тыс.руб.	3200	3200	320	2880						
16	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Фрунзе	Обеспечение возможности подключения новых потребителей	тыс.руб.	3300	3300	363	2937						
17	Модернизация котельных по ул. Фрунзе. Пухова, Советская,пер. Железнодорожный с полной заменой основного и вспомогательного оборудования котельной	Повышение надежности; повышение эффективности использования ТЭР; снижение тепловых потерь; автоматический режим работы	тыс.руб.	16300	16300			1630	14670				
18	Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС с использованием предизолированных труб	Повышение надежности; повышение эффективности использования ТЭР	тыс.руб.	5500	5500					605	4895		
	Итого по разделу 2			37000	37000	1589	13611	1630	14670	605	4895		
	Раздел 3. Электроснабжение												
	Ливенский филиал ОАО " Орелоблэнерго"												
19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Элеваторная, пер.Курский, пер.Западный, ул. 9 Мая, пер.Гражданский, пер.Народный, пер.Железнодорожный, ул. Победы, ул.8 Марта, ул.Комарова, ул. Песочная, пер. Московский, ул.Челпанова, 1-й пер. Челпанова, ул.Колхозная, ул.Гагарина, ул. Тургенева, ул. Комсомольская, ул. Северная, ул.Лермонтова.	Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Ливны	км	15	15		5		5		5		
			тыс.руб.	9000	9000	300	2700	300	2700	300	2700		
20	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП108-ТП-37; ТП151-ТП-62	Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Ливны	км	0,76	0,76				0,76				
			тыс.руб.	456	456			48	408				
21	Реконструкция ВЛ-6 кВ постанция 110/35/6кВт ул.Черкасская - ТП122 ТП104-ТП15;ТП104-ТП29;ТП14-РУ Элеватор	Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Ливны	км	2,5	2,5		0,7		0,85		0,95		
			тыс.руб	2000	2000	62	498	75	605	84	676		
	Итого по разделу 3			11456	11456	362	3198	423	3713	384	3376		
	Всего по программе			85308,5	85308,5	3044,347	28482,853	3349,25	29098,8	2304,15	19029,1